포장공사 시공계획서

2011. 08

000현장

목	차

1. 공 사  현 황	1

1.1 공 사  개 요	1

1.2 공 사  위 치	2

1.3 평면도, 대표단면도	2

1.4 예정 공정표	8

1.5 현장 조직도	9

2. 시공 상세계획	10

2.1 인원 및 장비투입 계획	10

2.2 포장시공계획	11

2.3 품질관리계획	22

2.4 환경관리계획	31

2.5 안전관리계획	33

1. 공 사  현 황

1.1 공 사  개 요

공   사   명 :

공 사  기 간 : 2011년 07월 ~ 2012년 05월

시공회사 및 협력회사

- 시공회사 :

- 협력회사 :

주 요  공 사

공 종	단위	규 격	본 선	사장교	접속교	00IC 1교	00IC 2교	00교
보조 기층	㎥	T＝20㎝	6,903	-	-	-	-	-
프라임 코팅	㎡ (D/M)	RSC-3	35,621 (136)	-	-	-	-	-
텍코팅	㎡ (D/M)	RSC-4	46,238 (71)	21,640 (33)	14,598 (22)	3,231 (7)	2,551 (5)	954 (2)
기 층	㎡ (TON)	T＝16㎝	23,524 (8,906)	-	-	-	-	-
중간층	㎡ (TON)	T＝ 7㎝	23,119 (3,862)	-	-	-	-	-
표 층	㎡ (TON)	T＝ 5㎝	22,120 (2,639)	-	-	-	-	-
		T＝ 5㎝ (SBS PMA)	885 (105)	14,426 (2,755)	9,732 (1,858)	4,847 (617)	3,826 (487)	1,432 (182)

1.2 공 사  위 치

1.3 평면도, 표준단면도

1.4 예정 공정표

공 종	규 격	2011년 8월						2012년 1월						2012년 2월						2012년 3월						비 고
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	29	5	10	15	20	25	30
차선전환 (본선,중로,001교)	기층,중간층,표층 SBS-PMA
본선	기층,중간층,표층
중2-38호선 2구간	기층,중간층,표층
사장교	SBS-PMA
접속교	SBS-PMA
00IC 1교	SBS-PMA
00IC 2교	SBS-PMA
`00교	SBS-PMA	`

7일

7일

3일

2일

3일

5일

10일

10일

1.5 현장 조직도

00건설(주)

				현장소장
							안전관리자
				부소장
설계팀		공무팀		공사팀			품질팀		관리팀
				협력업체 00건설(주)
				시공팀 12명

2. 인원 및 장비투입 계획

인원 투입계획

구 분	직 종	단 위	출 력 인 원	비 고
포 장 공	특 공	인	5
	보 통 인 부	인	4
	신 호 수	인	2

장비 투입계획

구 분	장 비 명	규 격	단위	투 입 대 수	비 고
골재포설	Back Hoe (타이어)	0.6 ㎥	대	1	골 재 포 설
	Dump Truck	15 Ton	대	1	골 재 소 운 반
	G r a d e r	3.6 M	대	1	골 재 포 설
	진 동 R o l l e r	10 Ton	대	1	골 재 다 짐
	진 동 R o l l e r	1 Ton	대	1	골 재 다 짐
	타이어 Roller	15 Ton	대	1	골 재 다 짐
	살 수 차	-	대	1	다 짐 살 수
포 장 공	D i s t r i b u t o r	4,000 L	대	1	유 제 살 포
	F i n i s h e r	5 M	대	1	아 스 콘 포 설
	Machdam Roller	10 Ton	대	1	1 차 전 압
	Tandem Roller	8 Ton	대	1	2 차 전 압
	타이어 Roller	15 Ton	대	1	마 무 리 전 압
	바 브 켓	66 HP	대	1	마무리정리, 청소

3. 포장시공계획

포장작업절차

		노상포설 및 다짐
		보 조 기 층
		프 라 임 코 팅
		기 층 포 장
		택 코 팅
		중 간 층 포 장
		택 코 팅
완 성 면 검 측		표 층 포 장

보조기층

- 혼합된 보조기층 재료는 입도가 균일하여야 하며, 소정의 함수비를 갖고 있어 재료의 저장, 운반

및 포설중 재료분리가 일어나지 않도록 시공한다.

- 보조기층 재료의 포설은 다짐후의 1층 두께가 20cm 넘지 않도록 한다.

- 다짐장비는 계획서상에 기재된 기종을 사용하여야 한다.

- 부설, 다짐작업은 OMC ±2％ 범위 내에서 작업한다.

- 다짐은 KS F 2312 다짐방법으로 구한 최대 건조밀도 95％ 이상의 밀도로 시공한다.

- 보조기층의 완성면은 계획고 보다 3㎝ 이상 차이가 나지 않게 시공하며, 완성두께는 설계두께

로부터  -5％ ,+10％ 이내의 증감이 없게 시공한다.

프라임 코팅

- 코팅전 보조기층 면상태를 확인하고 L형측구, 경계석, 기타 구조물 등 포장완성 후 노출된 부위가

AP에 묻지 않도록 시공한다.

- 프라임 코팅은 표면이 먼지가 나지 않을 정도로 잘 건조시킨 후 시공하여야 하며, 기온이 10℃

이하일 때는 감독원의 승인을 받아 시공한다.

- 혼합물 포설에 있어서 하층표면이 젖어있거나, 작업중 비가 오는 경우는 작업을 중지한다.

- 역청재료를 균일하게 살포할 수 있는 아스팔트 디스트리뷰터를 사용하고, 출입이 곤란한 협소한

곳에는 엔진 스프레이어 또는 핸드 스프레이어를 사용한다.

- 프라임 코팅을 시공할 표면은 시공전에 약간의 습윤상태로 하여 감독원의 승인을 받아 시공하고,

역청재의 침투를 방해하는 이물질이 있을 경우 파워브롬( Power Broom) 등으로 제거한다.

- 기층표면이 과도하게 건조되어 먼지가 일어나면 프라임 코팅 시공전에 소량의 살수를 가하고 난        후 시공 한다.

- 프라임 코팅은 1.0～2.0ℓ/㎡ 살포 후 24시간 (RSC) 이상 양생시킨다.

- 역청재 살포 24시간 경과 후 적게 살포된 부분은 추가로 살포하고, 과다하게 살포되어 흡수가

되지 않으면 표면에 모래를 살포하여 흡수시키고 바로 제거토록 한다.

- 프라임 코팅 이음부는 과소 또는 과다하게 살포가 되지 않도록 하여 시공한다.

- 역청재를 살포 후에는 손상이 되지 않도록 유지관리 하여야 한다.

택 코팅

- 택 코팅 표면이 먼지가 나지 않을 정도로 잘 건조된 후 시공 하여야 하며 , 기온이 5℃ 이하일

때는 감독원의 승인을 받아 시공한다.

- 혼합물 포설에 있어서 하층표면이 젖어있거나, 작업중 비가 오는 경우는 작업을 중지한다.

-  일몰 후 역청재를 살포할 경우는 감독원의 승인을 받아 시공한다.

- 작업장에 인접한 콘크리트포장, 보도 , 연석, 기층 또는 기타 시설물에 역청재가 묻지 않도록 보호

조치한다.

- 역청재료를 균일하게 살포할 수 있는 아스팔트 디스트리뷰터를 사용하고, 출입이 곤란한 협소한

곳에는 엔진 스프레이어 또는 핸드 스프레이어를 사용한다.

- 택 코팅 시공전에 포설바닥의 다져진 상태, 장비의 이상 유무, 바닥면의 청소상태 등에 대한

감독원의 승인을 받아 시공한다.

- 시공할 포장면은 뜬 돌, 먼지 기타 유해물질을 제거하고 시공한다.

- 역청재 살포후 즉시 타이어 롤러로  균일하게 살포되지 못한 부분은 수정하고 과다살포하여

포장에 유해하다고 판단되면 역청재를  제거하고 재시공한다.

- 유화 아스팔트는 살포를 용이하게 하기 위하여 가수하여 희석할 수 있으며 , 이때 가수량은 10％

이하로 하여 시공한다.

- 역청제를 살포 후에는 손상이 되지 않도록 유지관리 하여야 한다.

- 택코팅에 사용되는 역청재의 사용량은 0.2～0.6ℓ/㎡ 살포하고, 과잉살포가 되지 않도록 한다.

아스팔트 기층포장

- 아스팔트 혼합물의 포설에 사용하는 피니셔는 도면에 표시한 선형, 구배 및 크라운에 일치되도록

깔 수 있는 자주식 장비로서 라인센서를 부착한 장비를 사용한다.

- 피니셔는 혼합물을 평탄하게 깔 수 있는 호퍼, 깔기 스크류, 조절 스크리드 및 탬터를 장치한

것으로 혼합물의 공급량에 따라 작업속도를 조절할 수 있는 장비를 사용한다.

- 다짐장비는 8Ton 이상의 머케덤 롤러와 6Ton 이상의 2축식 텐덤 롤러 및 10Ton 이상의 타이어

롤러를 투입한다.

- 혼합물 포설을 시작하기 전에 포설바닥의 다져진 상태, 장비의 이상 유무(예열, 스크리드 수평,

스크리드 하부면 청소, 다짐 작동상태)를 점검하고, 사전준비 조치한다.

- 공사착수 전에 충분한 계획을 세워(작업공정, 하루 포설할 아스콘량, 운반 및 포설 인원배치,

포설구역, 이음위치, 이음처치 방법) 감독원의 승인을 받아 시공한다.

- 프라임 코팅 후 24시간 이내에 아스팔트 혼합물을 포설하지 아니한다.

- 혼합물 포설은 다짐 후 1층의 두께가 10㎝를 넘지 않도록 균일하게 포설한다.

- 깔기작업은 연속적으로 실시하며, 피니셔의 속도는 혼합물 두께와 종류에 따라 조정한다.

스크리드는 작업을 시작할 때 수시로 가열하여 시공한다.

- 편구배 구간에서는 도로중심선에 평행하게 노면이 낮은 곳에서 높은 곳으로  깔아야 하고, 직선

구간에서는 도로중심선에 평행하게 길어깨 쪽에서 도로중심선 쪽으로 깔아야 하며, 종단방향은

낮은 쪽에서  높은 곳으로  포설한다.

- 평탄성 확보를 위해 센서로 두께조절시 여러번 나누어 조절하고, 센서감도보다 포설속도가

빠르지 않게 작업한다.

- 교량 Joint 부위는 포설전에 모래 등을 채워 혼합물이 혼합되지 않도록 하고, Joint 시공은 될수록

Line Marking 위치에 둔다.

- 다짐밀도는 기준밀도의 96% 이상으로 다져야 하며, 다짐장비의 접근이 어려운 곳은 인력으로

시행한다.

- 다짐작업중 롤러의 다짐선을 갑자기 변경하거나, 방향을 바꿔 포설한 혼합물의 이동이 생기지

않도록 하여야 하며 방향 전환은  안정된 노면 위에서 실시한다.

- 다짐 후 다짐 장비를 포장면에 세워두지 않아야 하고,  포장면이 완전히 안정될 때 까지는 어떠한        것도 진입하지 않도록 한다.

- 포장의 이음부분은 외형상 눈에 띄지 않도록 정밀히 시공한다.

- 세로이음, 가로이음 및 구조물의 접속면은 깨끗이 청소를 실시하고 역청재를 바른후 시공한다.

가로이음 위치는 1M 이상, 세로이음 위치는 0.15M 이상 어긋나도록 시공한다.

- 마무리한 기층의 완성된 면은 어느 방향으로나 3M 직선자로 도로 중심선에 직각 또는 평행으로

측정하여 가장 들어간 곳이 3㎜ 이상이 되지 않도록 시공한다.

- 완성된 두께는 설계두께보다 10％ 이상 초과하거나 5％ 이상 부족시공이 되지 않도록 시공한다.

- 최종전압이 완료되면서 최소한 24시간동안, 포장 표면온도가 최소한 50℃ 이하로 내려갈 때

까지는 표면 위에 차량통행을 허용하지 않도록 유지한다.

아스팔트 중간층포장

- 기상조건

아스팔트 혼합물은 깔은 표면이 습윤되어 있거나 불결할 때, 또한 비가 내리거나 안개가 낀 날은

시공하지 않아야 한다.  시공중 비가 내리기 시작하면 즉시 작업을 중지하고 감독원의 지시를

따라야 한다.  깔은 표면이 얼어있을 때는 아스팔트 혼합물을 깔아서는 안되며, 기온이 5℃ 이하일

때는 시공하여서는 안된다.

- 깔기

• 프라임 코팅이나 택 코팅이 충분히 양생되기 전에는 혼합물을 깔아서는 안된다.

• 시방온도보다 20℃ 이상 낮을 경우에는 감독원의 별도지시가 없는 한 그 혼합물을 폐기하여야

한다.

• 아스팔트 중간층은 1층의 다짐후의 두께가 7～10㎝ 범위에 들도록 깔아야 한다.

• 깔기작업의 작업도중 오랫동안 중단되었을 때는 혼합물이 깔기 및 다짐에 적합한 온도 이하로

식어서 완성면의 평탄성이 좋지 않거나 다짐밀도가 적어지므로 깔기작업이 연속적으로 되어야

한다.

• 플랜트의 생산능력에 맞추어 깔기속도를 조정하여야 하며, 연속적인 깔기작업이 가능토록

운반계획을 면밀히 수립하여야 한다.

• 혼합물은 깔기 스크류 깊이의 ⅔ 이상 차 있도록 호퍼에 충분히 공급하여야 한다.  이때 호퍼의

조정문은 스크류와 피이더가 85％이상 작동되도록 조절되어야 한다.

• 피니셔의 속도는 혼합물 깔은 두께와 종류에 따라 조정하며 스크리드는 작업을 시작할 때

수시로 가열하여야 한다.

• 편구배가 있는 구간에서는 도로 중심선에 평행하게 노면이 낮은 곳에서 높은 곳으로 깔아야

한다.

• 직선구간에서는 도로 중심선에서 평행하게 갓길 쪽에서 도로중심선 쪽으로 깔아야 하며, 종단

방향은 낮은 곳에서 높은 곳으로 깔아야 한다.

• 피니셔 뒤에는 삽과 레이크 인부를 고정배치하여 피니셔 마무리가 불완전한 곳을 수정하여

나가야 한다.

• 까는중에 혼합물의 재료분리가 생길경우에는 피니셔 운행을 즉시 중지하고 원인조사를 하여

불량부분을 보수하여야 한다.

• 기계깔기가 불가능한 곳에서는 인력깔기를 하여야 하며 이때 재료분리 현상이 일어나지 않도록

주의해야 한다.

• 이미 완성된 포장층에는 감독원의 승인을 받아 택 코팅을 실행한 후 혼합물을 깔아야 한다.

• 혼합물의 온도는 110℃ 이상으로 하고 기온이 5℃ 이하일 때는 한냉기 포설에 준하여 포설하며

동절기에 있어 기온이 5℃ 이상이라도 바람이 강하게 불 때는 이와 동일하게 포설한다.

- 다짐

• 다짐장비는 8Ton 이상의 머케덤 롤러와 6Ton 이상의 2축식 텐덤 롤러 및 10Ton 이상의

타이어 롤러를 구비하여야 한다.  롤러의 전, 후진 방향전환 시 노면에 충격을 가하지 않는

자주식으로서 혼합물이 바퀴에 부착되지 않도록 바퀴에 물을 공급하는 장치가 구비되어 있어야         한다.

• 혼합물을 깔은 후 균일하게 그리고 충분히 다짐을 실시하여야 하며, 롤러 다짐이 불가능한

곳에서는 수동 탬퍼로서 충분히 다져야 한다.

• 다짐작업에 사용할 롤러의 대수, 조합 다짐횟수 등은 사전 계획된 내용으로 시행한다.

• 1차 다짐은 혼합물이 변위를 일으키거나 헤어크랙이 생기지 않을 한도에서 가능한 높은 온도

(110～140℃)에서 실시한다.

• 혼합물 깔기 후 롤러 하중에 의하여 이동하지 않을 정도로 안정되면 즉시 롤러를 투입하여

다짐을 시행한다.

• 머케덤 롤러로 초기다짐을 실시한 후 횡단면의 양호도를 검사하여야 하며 불량한 곳이 발견

되면 감독원의 지시에 따라 혼합물의 가감을 수정하여야 한다.

• 다짐작업중 롤러의 다짐선을 갑자기 변경하거나 방향을 바꿔 깔은 혼합물의 이동이 생기도록         하여서는 안된다.

• 롤러의 방향전환은 안정된 노면위에서 하여야하며 깔은 혼합물이 이동되었으면 레이크로

다짐전 상태로 만들어 다시 다짐을 실시하여야 한다.

• 2차 다짐(70～90℃)에서 1차 다짐에 이어 실시하고 마무리 다짐(60℃)은 롤러 자국이

없어지도록 실시한다.

• 다짐이 끝났다 하더라도 완전히 안정될 때 까지는 롤러 등 중장비를 포장면에 세워 두어서는

안된다.

• 다짐밀도는 기준밀도의 최소 96％의 밀도이어야 한다.

• 다짐작업후 24시간 이내에는 감독원의 승인 없이 교통을 소통시켜서는 안된다.

• 다짐 초기에 혼합물의 안정상태가 나쁘게 된 경우는 1차 다짐온도가 너무 높거나 입도,

아스팔트량이 적절하지 않은지 등을 검토한다.

• 헤어크렉이 많이 나타난 경우는 혼합물 배합의 부적정, 롤러의 전압과다, 다짐온도의 고온

등을 점검한다.

• 진동롤러로 다질 때 다짐속도가 너무 빠르면 요철이나 파형이 생기고, 너무 느리면 과다짐이

될 수 있기 때문에 최적속도로 다진다.

- 세로이음, 가로이음 및 구조물의 접속면은 깨끗이 청소를 실시하고 역청재를 바른후 시공한다.

가로이음 위치는 1M 이상, 세로이음 위치는 0.15M 이상 어긋나도록 시공한다.

- 마무리한 기층의 완성된 면은 어느 방향으로나 3M 직선자로 도로 중심선에 직각 또는 평행으로

측정하여 가장 들어간 곳이 3㎜ 이상이 되지 않도록 시공한다.

아스팔트 표층포장

- 아스팔트 혼합물의 포설에 사용하는 피니셔는 도면에 표시한 선형, 구배 및 크라운에 일치되도록

깔수 있는 자주식 장비로서 라인센서를 부착한 장비를 사용한다.

- 피니셔는 혼합물을 평탄하게 깔수있는 호퍼, 깔기 스크류, 조절 스크리드 및 탬터를 장치한

것으로 혼합물의 공급량에 따라 작업속도를 조절할 수 있는 장비를 사용 한다.

- 다짐장비는 8Ton 이상의 머케덤 롤러와 6Ton 이상의 2축식 텐덤 롤러 및 10Ton 이상의 타이어        롤러를 투입한다.

- 혼합물 포설을 시작하기 전에 포설바닥의 다져진 상태, 장비의 이상 유무(예열, 스크리드 수평,

스크리드 하부면 청소, 다짐 작동상태)를 점검하고, 사전준비 조치한다.

- 공사착수 전에 충분한 계획을 세워(작업공정, 하루 포설할 아스콘량, 운반 및 포설, 인원배치,

포설구역, 이음위치, 이음처치방법, 과속방지턱 , 부대시설계획) 감독원의 승인을 받아 시공한다.

- 기상이 다음 상태일 때는 시공을 금지한다.

• 표면이 습윤상태거나 얼어있을 때

• 기온이 5℃ 이하

• 안개가 심하게 끼었을 때

- 혼합물 포설은 다짐후 1층의 두께가 7㎝를 넘지 않도록 균일하게 포설한다.

- 깔기작업은 연속적으로 실시하며, 피니셔의 속도는 혼합물 두께와 종류에 따라 조정하며,

스크리드는 작업을 시작할 때  수시로 가열하여 시공한다.

- 편구배 구간에서는 도로중심선에 평행하게 노면이 낮은 곳에서 높은 곳으로  깔아야 하고, 직선

구간에서는 도로중심선에 평행하게 길어깨 쪽에서 도로중심선 쪽으로 깔아야 하며, 종단방향은

낮은 쪽에서  높은 곳으로  포설 한다.

- 피니셔의 호퍼에 혼합물을 넣기 전에 그 품질을 확인하고, 혼합물의 재료분리를 적게 하기위해

덤프 혼합물 투입시 충격을 최소화 하며, 1차 덤프에서 덜어내는 모양으로 쏟은 후 2차는 수평

으로 혼합물이 내려오도록 하여 플로우에 조세립자가 분리되지 않도록 한다.

- 혼합물은 호퍼내의 충분한 양이 있도록 ,스크류 스프레다 양단에 스크류 깊이의 ⅔까지 있도록

한다.

- 포설중 피니셔의 스크리드에 부착되어 있는 템퍼(Tamper)는 계속 작동하여 혼합물이 다져지도록

한다.

- 평탄성 확보를 위해 피니셔는 가급적 일정한 속도로 연속적으로 운전하며, 작업의 시작 3～5M

사이는 설치가 안정되지 않으므로 수정작업을 반복하여 시공하여야 한다.

- Thickness controller로 포설두께를 조정할 때 한꺼번에 조정하면 평탄성이 나빠지므로 여러번

나누어  조정한다. (¼ 회전씩 조정)

- 스크리드 조정원은 Thickness Gauge를 사용해 포설두께를 수시로 확인 점검한다.

- 포설중에 혼합물의 재료분리가 생길 경우에는 피니셔의 운행을 중단하고 수정 또는 제거 후

재포설하여 시공한다.

- 포설작업 중에 비가 내리면 작업을 중단하고 포설된 부분을 조속히 다짐하여 마무리한다.

- 다짐밀도는 기준밀도의 96％ 이상으로 다져야 하며, 다짐장비의 접근이 어려운 곳은 인력으로

시행한다.

- 다짐작업 중 롤러의 다짐선을 갑자기 변경하거나, 방향을 바꿔 포설한 혼합물의 이동이 생기지

않도록 하여야 하며 방향전환은 안정된 노면위에서 실시한다.

- 다짐 후 다짐장비를 포장면에 세워두지 않아야 하고 포장면이 완전히 안정될 때 까지는 어떠한

것도 진입하지 않도록 한다.

- 1차 전압은 혼합물이 변위를 일으키거나, 헤어크랙이 생기지 않을 고온에서 다진다. (혼합물온도

110～140℃)

- 2차 전압은 1차 다짐의 연속으로 소정의 밀도가 나올 수 있도록 다진다. (혼합물 온도 70～ 90℃)

- 마무리 전압은 롤러 자국이 생기지 않을 때까지 다진다. (혼합물의 온도 60℃)

- 1차 다짐시 헤어크랙(Har Crack)이 발생하면 롤러의 전압력이나 타이어의 공기압을 낮추어 다짐

하며, 혼합물의 온도가 다소 낮아질 때 전압한다.

- 다짐 시 유의사항

• 이음부(Joint )부터  전압한다.

• 낮은 곳에서 높은 곳으로 전압한다.

• 롤러의 구동륜 폭의 절반정도 겹치도록 다진다.

• 외연부 다짐은 롤러의 차륜을 연단부로부터 5～10㎝ 튀어나오게 하여 다진다.

• 피니셔와 롤러의 거리는 항상 1～2M 간격을 유지하며, 급격한 전후진 조작을 하여선 안된다.

- 포장의 이음부분은 외형상 눈에 띄지 않도록 정밀히 시공한다.

- 세로이음, 가로이음 및 구조물의 접속면은 깨끗이 청소하고 역청재를 바른 후 시공하고, 가로

이음위치는 1M 이상, 세로 이음위치는 0.15M 이상 어긋나도록 시공한다.

- 일일 마무리(이음부)위치에서는 소요두께를 확보할 수 있는 각목을 설치하여 마무리 하고 익일

포설시 각목을 제거하고 역청재 살포 후 시공한다.

- 포장의 평탄성은 일반도로 본선은 Pr＝10㎝/㎞ 이하, 교량 접속부 Pri＝20㎝/㎞ 이하로 시공

평탄성을 확보한다.(확장 및 시가지 본선 Pri＝16㎝/㎞, 교량 접속부 Pri＝24㎝/㎞ 이하)

- 마무리한 기층의 완성된 면은 어느 방향으로나 3M 직선자로 도로중심선에 직각 또는 평행으로

측정하여 가장 들어간 곳이 3㎜ 이상이 되지 않도록 시공한다.

- 완성된 두께는 설계두께보다 10％이상 초과하거나 5％ 이상 부족시공이 되지 않도록 시공한다.

- 최종전압이 완료되면서 최소한 24시간 동안, 포장 표면온도가 최소한 50℃ 이하로 내려갈 때

까지는 표면위에 차량통행을 허용되지 않도록 유지한다.

4. 품질관리계획

보조기층 (SB-2)

- 재료는 견고하고 내구적인 쇄석, 자갈, 모래, 슬레그 등으로 점토덩어리 유기물, 먼지 등 기타

유해물을 함유하지 않은 재료로서 외형은 비교적 균일한 형상을 갖고 있어야 한다.

구 분	시 험 방 법	기 준	비 고
마 모 감 량 (％)	KS F 2508	50 이 하
소 성 지 수	KS F 2304	6 이 하
액 성 한 계 (％)	KS F 2303	25 이 하
수정 CBR치 (％)	KS F 2320	30 이 상
모 래 당 량 (％)	KS F 2340	25 이 상

[ 보조기층 재료시험 및 기준 ]

입도번호	통 과 중 량 백 분 율 (%)								비 고
	75.0 ㎜	53.0 ㎜	37.5 ㎜	19.0 ㎜	4.75 ㎜	2.0 ㎜	425 ㎛	75 ㎛
SB - 1	100	-	70～100	50～ 90	30～65	20～55	5～25	2～10
SB - 2	-	100	80～100	55～100	30～70	20～55	5～30	2～10

[ 보조기층 재료의 입도 표준 ]

- 재료 관리

• 입경별로 분리저장, 혼입방지를 위한 칸막이 및 이물질 혼입여부 확인.

• 소성변형 방지를 위한 골재 합성입도 #4㎜ 이하 체의 통과율이 시방입도 범위 중 중앙값

이하 관리.

• 비에 젖은 골재의 건조기간을 감안하여 2～3일간 생산이 중단되지 않도록 우수침입으로 부터

보호될 수 있는 야적장 덮게 설치.

유화아스팔트

- 재료관리

• 역청재료는 KS M 2203  RSC-3, RSC -4 또는 동등 이상의 재료를 사용한다.

• 역청재료는 제조 후 60일이 넘는 것을 사용해선 안된다.

종 별	시 험 종 목	시 험 방 법	시 험 빈 도	비 고
유 화 아 스 팔 트	KS M 2203 에 규정된 시험항목	KS M 2203	제 조 회 사 별
			제품 규격마다
			반 입 시 마 다

[ 유화아스팔트 품질관리 시험 ]

아스팔트 기층

- 재료의 품질 기준

• 도로 포장용 아스팔트는 KS M 2201에서 규정한 제품 이상이어야 한다.

• 포장용 골재는 KS F 2357에 적합한 것으로 한다.

• 골재는 단단하고 강하며 내구적이고, 부착물이 없어야 하고 점토나 실트 그 밖의 해로운

물질이 함유되지 않은 것으로  한다.

구 분	시 험 방 법	기 준	비 고
마 모 감 량 (％)	KS F 2508	40 이 하
흡 수 율 (％)	KS F 2503	3.5 이 하
안정성 (％) : 황산나트륨 사용	KS F 2507	12 이 하	5회 반복 시험
피막박리시험에 의한 피복면적 (％)	KS F 2355	95 이 상
표 면 건 조 비 중	KS F 2503	2.5 이 상

[ 역청혼합물에 사용되는 골재의 품질 ]

• 채움재는 KS F 3501에 적합한 것이어야 한다.

• 채움재는 석회석, 포틀랜드시멘트, 기타 적합한 광물의 분말로서 먼지, 진흙 , 유기물, 덩어리

미립자 등의 해로운 물질이 함유되지 않은 재료이어야 한다.

체 의 공 칭 치 수	통 과 중 량 백 분 율 ( ％ )	비 고
600 ㎛ ( No. 30 )	1 0 0
300 ㎛ ( No. 50 )	9 5 이 상
150 ㎛ ( No. 100 )	9 0 이 상
75 ㎛ ( No. 200 )	체의 공칭치수 70 이상

[ 채움재의 입도 기준 ]

• 아스팔트 혼합물은 믹서에서 배출시 혼합물의 온도는 시험배합에서 결정된 혼합물 온도에서

±15℃의 범위내에 있되 180℃를 넘어서는 안된다.

체의 크기 종류		B B - 1	B B - 2	B B - 3		B B - 1	B B - 2	B B - 3
통 과 중 량 백분율 ( ％ )	5 0 ㎜	1 0 0	-	-	2.5 ㎜	10～ 42	-	-
	4 0 ㎜	95～100	1 0 0	-	2.0 ㎜	-	17～ 40	20～ 50
	2 5 ㎜	75～100	-	1 0 0	0.6 ㎜	5 ～ 28	-	-
	2 0 ㎜	55～ 90	55～ 90	75～100	0.4 ㎜	-	5 ～ 23	5 ～ 25
	1 0 ㎜	30～ 70	40～ 70	50～ 85	0.3 ㎜	3 ～ 22	-	-
	5 ㎜	17～ 55	28～ 55	30～ 70	0.08 ㎜	1 ～ 10	1 ～ 7	1 ～ 7

[ 기층용 혼합물의 표준배합 ]

아스팔트 중간층

- 재료의 품질기준 : 기층과 동일

구 분	품 질 기 준	비 고
소 성 지 수	6 이 하
흐 름 지 수	5 0 ％ 이 하
침 수 팽 창	3 ％ 이 하
박 리 저 항 성	1 / 4 이 하

[ 채움재의 품질 기준 ]

혼 합 물 의 종 류		중간층용 아스콘	혼 합 물 의 종 류		중간층용 아스콘
통 과 무 게 백분율 (％)	26.5 ㎜	100	통 과 무 게 백분율 (％)	600 ㎛	11 ～ 23
	19 ㎜	95 ～ 100		300 ㎛	5 ～ 16
	13.2 ㎜	70 ～ 90		150 ㎛	4 ～ 12
	4.75 ㎜	35 ～ 55		75 ㎛	2 ～ 7
	2.36 ㎜	20 ～ 35
아 스 팔 트 량 ( ％ )		4 . 5 ～ 6 . 0

[ 굵은골재, 잔골재, 채움재의 합성입도 ]

아스팔트 콘크리트 표층

- 재료의 품질기준

• 도로용 아스팔트는 KS F 2201에서 규정한 제품을 사용한다.

항목 종류	제품명	침입도 (25℃)	연화점 (°C )	신 도 (15℃ : ㎝)	톨루엔 가용분 (무게%)	인화점 ( ℃ )	박 막 가 열		증발후의 침입도비 (%)	밀 도 (15℃ : g/㎤
							질 량 변화율 (%)	침입도잔류율 (%)
60-80	AP -5	60 초과 80 이하	44～ 52	100이상	99.0 이 상	2 6 0 이 상	0.6 이하	55이상	110 이하	1,000 이 상
80-100	AP-3	80 초과 100이하	42～ 50					50이상

[ 도로용 아스팔트의 품질 ]

구 분	굵 은 골 재	잔 골 재	비 고
비 중 (절건)	2.45 이상	2.50 이상
흡 수 율 (%)	3.0 이하	3.0 이하
안 정 성 (%)	12 이하	15 이하
마 모 율 (%)	35 이하	-

[ 역청 혼합물에 사용되는 골재의 품질 ]

• 아스팔트 콘크리트의 혼합물은 온도계를 사용하여 매 반입차량마다 온도를 검사하며, 지정한

시방온도 보다 20℃ 이상 낮을 경우 폐기처분한다.

• 포장면 위에 물이 넘치게 하여 물이 고인곳에 백묵으로 표시해 두고, 낮거나 높은곳은 보완

수정 조치한다.

5. 환경관리계획

대기오염관리

- 현장내에서의 작업중 발생하는 비산먼지의 발생을 최소화하고 작업자의 보호조치를 한다.

- 창고, 작업장내 악취 및 가스 등의 발생을 사전에 확인하여 제거한다.

- 폐기물을 불법 소각하지 않는다. (현장내 소각행위 금지)

수질오염관리

- 작업중 발생하는 폐수량을 최소화 한다.

- 발생한 폐수는 오수에 유입되지 않도록 구분, 관리한다.

- 오염물질을 투기하거나 불법 세차를 하지 않는다.

소음, 진동관리

- 소음, 진동이 발생되는 장비에 대하여 방지시설을 설치하여 소음, 진동이 저감되도록 유지관리하고

필요한 경우 귀마개 착용 등 작업자 보호조치를 취한다.

폐기물 관리

- 폐기물은 재활용을 우선적으로 고려하여 종류별로 분리수거하여 보관한다.

- 작업종료 후에는 모든 폐기물을 수거하여 방치하지 않는다.

- 폐기물의 보관시설 및 보관용기는 별도 관리하고 지정폐기물에 대해서는 폐기물의 종류, 보관량,

보관기한, 유의사항 등을 기록하여 식별, 표시한다.

- 부식 또는 손괴되지 않는 재질의 보관시설 또는 보관용기를 사용한다.

- 바닥에 물이 스며들지 않는 재료로 하고, 자체하중과 적재하중에 견딜 수 있게 한다.

- 폐기물의 발생 및 처리내역은 자세히 기록, 관리한다.

- 발생되어 보관중인 폐기물의 처리는 환경적합성이 확보된 등록업체에 위탁하여 처리한다.

위험물 관리

- 사용하는 위험물에 대하여 물질명, 유독성, 용도, 사용량을 파악하여 기록, 관리한다.

- 위험물의 보관, 지정장소, 또는 위험물의 용기, 포장에는 식별이 용이하도록 위험물 표시를 한다.

점검 및 조치

- 월 1회 이상 환경영향 점검을 실시한다.

- 환경영향 점검 시 법기준을 초과하는 환경영향이 발생할 경우에는 철저히 조사 후 신속히 조치

한다.

6. 안전관리계획

교 육  계 획

종 류	대 상 자	시 간	담 당 자 ( 강 사 )	방 법	교 육 내 용	비 고
정 기 안전 보건 교 육	근 로 자	월2시간 이 상	안전 보건 총괄책임자 안전관리자 안전감독자	집합교육 강 의	․ 산업안전보건법령에 관한 사항 ․ 표준안전작업방법에 관한 사항 ․ 보호구 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 ․ 안전사고사례 및 산업재해예방 대책 ․ 안전보건표지에 관한 사항 ․ 기타 안전보건관리에 필요한 사항	교육시간을 분할하여 실시 가능
	관 리 감 독 자	월2시간 이 상	안전 보건 총괄책임자	집합교육 강 의	․ 산업안전보건법령에 관한 사항 ․ 작업안전지도요령에 관한 사항 ․ 기계, 기구 또는 설비의 안전, 보건점검에 관한 사항 ․ 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항 ․ 기타 안전보건관리에 필요한 사항	교육시간을 분할하여 실시 가능
신규채용시 및 작업 내용 변 경 시 교 육	근 로 자	1 시 간 이 상	안전관리자 관리감독자	개별또는 집합교육	․ 산업안전보건법령에 관한 사항 ․ 당해 설비. 기계, 기구의 작업 안전점검에 관한 사항 ․ 기계, 기구의 위험성과 안전작업 방법, 기타 안전보건관리에 필요 한 사항에 관한 사항
특별 안전 보건 교육	근 로 자	1 시 간 이 상	안전관리자 관리감독자	개별또는 집합교육	․ 신규채용시 교육과 동일한 내용 및 유해, 위험작업에 대한 특별 교육

공종별 세부안전교육 내용

- 일반 사항

• 본공사의 시공계획에 맞추어 공사용 도로, 기계설비, 안전시설의 배치, 정비를 실시하고 운반

도로, 통로, 재료적치장 등을 명확히 하여 공사를 개시하도록 교육

• 공사용 도로, 공사용 기계, 공사용 시설 및 안전시설은 점검, 정비를 철저히 하고 보호구 및

장구 등도 점검, 보수 등을 실시하여 부족분을 충분히 보충

• 신호, 안전표지, 지시표지 등을 확인하면서 작업을 병행

• 안전모, 안전화 등의 필요 보호구는 반드시 착용하며, 작업복은 작업에 적합한 복장을 착용

- 기계설비 운영시 주의사항

• 기계의 설치, 조립 해체는 해당 작업책임자의 직접 지휘로 실시

• 작업중 와이어로프 내측에 출입금지 표시를 설치해 출입을 제한하고 크레인 등 양중기계는

정격하중 등을 명시

• 기계의 운전은 반드시 지정된 자가 운전하고 운반 작업시는 신호수를 배치하여 정해진 신호에

의하여 작업을 실시

• 회전축, 밸트, 휠, 연삭기(그라인더) 등의 덮개 또는 접촉방지 장치 등 안전장치 설치

• 경험이 있는 감시원 배치

• 도로에 근접하여 작업하는 경우 도로 감시원 을 배치하고 안전표지를 부착

• 위험이 많은 작업장에 굴착장비, 트럭 등을 운전하는 경우 신호수를 배치

• 대비 및 신호방법을 정하여 사용하며, 특히 소음이 있는 작업장에는 신호가 소음에 영향을

받지 않는 방법 강구

• 매설물에 근접한 작업에는 매설물 관리자의 입회하에 작업 실시

• 매설물은 달아매기, 받침 등을 견고하게 설치하며 상황에 따라 명확한 표시, 방호물을 설치하며

작업중에는 감시자를 배치, 작업완료시는 신속한 복구 실시

- 굴착작업시 주의사항

• 굴착토사 및 기자재 등은 굴착단부 적치 금지

• 작업관리자(반장급)의 지휘아래 작업 실시

- 포장장비 운행시 주의사항

• 건설기계, 트럭 등의 운전은 자격있는 지명된 자가 운전

• 기계운전자는 안전모를 착용

• 운전수칙을 확실시 준수, 무리하고 난폭한 운전은 자중

• 작업범위내 타작업자가 있을 때는 주의하며, 상호 긴밀히 협조 작업하고 작업 범위내는 작업자

외  출입금지

• 후진시는 유도원의 지시로 이동

• 무리한 사용은 금지하고 노면의 끝단의 작업시는 유도자 배치

• 사면붕괴가 쉬운 지반상에 기계설치 금지

• 기계운전의 정지시는 반드시 시동을 끄고 시건장치 실시

• 도로상의 작업은 도로공사 안전시설기준에 따라 각종 표지, 바리케이트, 야간조명, 유도원을

배치하여 실시

• 고압선 부근에서 작업시는 접촉위험 고압선은 반드시 방호조치를 하고 방호조치가 되지 않는

고압선 하부 작업 또는 이동은 유도자를 배치하고 붐은 최소한 고압선에서 3M 이상 이격

• 기계의 능력 이상 초과되지 않게 사용

안전관리 Check List

- 일 반  사 항

• 안전보건교육 실시 상태, 작업환경 및 시설(표지판 등)

• 시공계획상의 안정성 검토, 위험관리, 화재예방

• 작업통제(작업자의 행동 등) 및 작업내용 숙지, 정리정돈 및 청소

• 운반이동시의 안정성, 재해발생시의 응급처리 대책, 표준 안전관리비

- 안전보건 조직관리

• 안전보건관리자 유자격자 선임보고 여부

• 작업장별 책임자 선임, 안전보건위원회 설치 여부

• 관리감독과 안전점검 및 시정조치 여부

- 안전보건 교육

• 관리자 법정교육 이수, 근로자 정기 및 수시교육 실시 여부

- 건강진단 및 산재처리

• 정기 및 특수건강진단 실시, 유소견자 소치 여부

• 산재처리 절차 체계 확립

• 작업장 부근의 고압전선 등 위험요소에 대한 방호조치

• 상하 동시작업시의 신호체계와 작업감독자의 지휘작업 실시 체계 확립

• 우회도로 설치 및 점검에 따른 유지보수

• 안전표지, 방호설비의 설치와 신호수 배치 (교통안전 주임)

• 교통처리계획의 적정여부

• 안전담당자 배치 여부, 사전조사 실시 및 계획수립의 타당성

• 작업장 출입제한 등 작업장 통제업무, 야간작업시의 조명 등의 설치

• 장비의 이동시(운반시) 가설도로 등의 위험요수 여부

• 무리한 작업량의 배정으로 인한 장비운행의 여부 (과속 등)

• 지하매설물에 대한 조치 적정 여부

- 건설기계 관리

• 안전담당자의 배치 여부, 운전자의 안전수직준수와 작업통제

• 사용건설기계의 종류 및 선회에 따른 작업방법과 계획의 안전성

• 기계, 기구의 안전점검과 조작시의 안전

• 작업상황에 따른 안전조치

• 작업구역내의 안전시설 및 위험방지 조치 (작업시 도괴의 방지)

• 덤프트럭의 진입, 출발시 신호수 배치 여부, 적재함 포장의 필요시 사용 여부

• 작업장 진입로, 작업장내의 교통표지판 또는 경로판의 설치 여부